109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 청주시에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2020년 집행사업비	2021년	2022년 이후
서원청소년 문화의집 건립	6,549	-	2,212	212	4,125	2023	2019	사전절차 이행 ※ 설계공모중 (‘21.6.~8.)
북부시장 주차장 조성	3,896	2,861	1,035	-	-	2020	2018	100
서문시장 주차장 조성	2,600	-	1,876	724	-	2021	2020	30
성안길상점가 주차장 조성	2,200	1,940	260	-	-	2020	2018	100
육거리종합시장 대형버스 주차장 조성	6,700	-	3,328	3,372	-	2021	2019	50
2020년 신재생에너지 융복합지원사업	4,651	-	4,651	-	-	2020	2019	100
2020년 수소충전소 설치사업	3,000	-	3,000	-	-	2021	2019	100
도시가스 공급관설치 지원사업	2,379	-	2,379	-	-	2020	2019	100
청주 ICT센터 건립 (충북시청자 미디어센터 조성)	1,494	1,033	461	-	-	2020	2018	100
무선 마을방송시스템설치 지원사업	13,069	331	4,200	900	7,638	2027	2018	50
장애인 가족지원센터 재건축공사	2,192	331	67	1,794	0	2021	2020	15
청주시365열린 장애인 돌봄센터건립	2,200	-	600	1,600	-	2021	2020	50
청주시 가족센터 조성사업	12,000	290	1,765	5,329	4,616	2022	2018	15
개신초 다목적교실 신축	3,161	1,317	1,844	-	-	2020	2018	100
청주외고 다목적교실신축	1,964	850	1,114	-	-	2020	2019	100
대성중 다목적교실신축	2,934	7	2,927	-	-	2020	2019	100
충북상업정보고 다목적교실신축	2,718	-	207	2,511	-	2021	2019	87
충북고 다목적교실증축	3,935	-	15	1,960	1,960	2021	2019	6
초정클러스터 관광육성	24,950	100	4,160	6,472	14,218	2023	2019	20
문화산수 옥화구곡 관광길 조성사업	2,300	1,050	1,050	200	-	2022	2017	80
청주실내빙상장 건립사업	27,033	18,762	8,271	-	-	-	2017	100
청주 영운국민체육센터 건립사업	19,980	5,329	4,350	10,301	-	2022	2018	80
내수 야구장 조성사업	9,100	80	-	3,000	6,020	2022	2018	설계 60
내수 체육공원 조성사업	34,600	28,901	5,699	-	-	2020	2018	100
청주 인공암벽 등반장 건립사업	3,000	-	463	2,537	-	2021	2018	75
오송다목적 체육관건립사업	17,100	7,131	250	9,719	-	2023	2018	설계 60
복대국민체육 센터건립사업	9,600	3,432	268	5,900	-	2023	2019	설계 60
가경국민체육 센터건립사업	9,600	4,712	288	4,600	-	2023	2019	설계 60
사천 반다비 체육센터 건립사업	2,500	-	-	800	1,700	2022	2019	0
사슴가공식품 육성을 통한 창조농업특성화	6,980	6,956	24	-	-	2020	2014	100
청주시 농수산물도매시장시설 현대화사업	136,778	282	327	16,498	119,671	2025	2020	20
남주남문로 웨딩테마거리 조성사업	6,000	2,082	626	3,292	-	2021	2016	62
안덕벌 예술의 거리 상권활성화	6,072	3,892	2,180	-	-	2020	2014	100
2020년 청주시 지능형교통체계 (ITS) 구축 사업	3,200	-	2,087	1,113	-	2021	2019	33
저상버스 도입보조	2.100	-	2,100	-	-	2020	2020	100
전기 시내버스 도입보조	3.520	-	3,520	-	-	2020	2019	100
청주시청사 건립사업	231,200	52,100	4,700	7,100	167,300	2025	2016	20
흥덕구청사 건립사업	61,894	21,280	22,100	18,514	-	2021	2016	100
북이면 다목적회관 증축사업	2,956	1,504	1,452	-	-	2020	2017	100
서원보건소 청사 이전 신축	16,668	325	-	-	16,343	2024	2017	0.5
첨단농업 연구단지조성	8,215	5,269	2,081	865	-	2021	2018	70
농산물안전성 분석실설치	5,341	1,468	2,817	1,056	-	2021	2019	70
제1회청주시 도시농업박람회	890	785	105	-	-	2020	2019	100
우암산둘레길 조성사업	10,000		350	8,333	1,317	2023	2020	10
북이서당리 도로확포장공사	3,100	850	1,125	1,125	-	2022	2018	공사 50
오송쌍청1리 도로확포장공사	6,000	80	1,200	2,800	1,920	2022	2017	보상 45
오창성산리 도로확포장공사	3,850	150	1,100	1,500	1,100	2021	2017	공사 49
죽전~품곡간 도로확포장공사	9,300	339	-	3,261	5,700	2023	2017	설계 80
호정~추정간 도로확포장공사	5,790	798	2,195	2,156	641	2021	2018	공사 39
구룡~화산리 도로확포장공사	4,400	356	-	947	3,097	2023	2019	설계 70
남일송암리 도로확포장공사	3,832	127	315	2,428	962	2023	2019	공사 1
미평동 남지로 주변 도로개설공사	8,000	3,741	1,798	2,197	264	2023	2014	50
용박골 진입도로 개설공사	3,700	3,300	400	-	-	2020	2014	100
아름다운웨딩홀~ 고은삼거리 간 도로확장공사	25,000	5,000	-	3,000	17,000	2025	2014	30
제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사	46,120	2,875	-	9,215	34,030	2025	2015	20
상당산성 진입로 확장공사	4,400	120	500	2,000	1,780	2023	2015	20
수영로 확장공사	16,769	200	-	-	16,569	2025	2015	15
내수농공단지 주변도로개설	9,000	592	-	2,895	5,513	2023	2015	30
대성로 확장공사	24,443	18,112	1,400	2,000	2,931	2023	2016	30
청주 하이패스전용 나들목설치	33,200	15,100	6,000	7,100	5,000	2022	2016	30
석곡사거리~ 척북삼거리 확장공사	4,560	3,484	-	900	176	2022	2016	30
서부로(석곡사거리~죽림사거리) 확장공사	18,000	1,736	1,000	7,000	8,264	2024	2016	15
무심서로 (제2운천교~ 차량등록사업소) 확장사업	8,467	225	-	5,264	2,978	2022	2016	15
용담로(청가랑~ 괴강매운탕) 확장공사	5,918	2,647	-	-	3,271	2022	2016	10
미호천 제방도로 교행차로 설치공사	15,000	8,390	289	3,000	3,321	2023	2016	50
새터초앞 도로확장공사	4,300	566	-	-	3,734	2023	2016	10
탑연1리~진흥 아파트 우회도로 개설공사(2단계)	16,700	4,473	-	500	11,727	2025	2017	50
단재로(효촌교차로~지북사거리) 확장공사	56,072	4,710	2,170	17,965	31,227	2027	2017	30
가마교차로 확장공사	3,910	300	1,505	2,105	-	2021	2017	30
남일면 신송리 도로확장공사	14,645	-	-	7,300	7,345	2022	2017	5
복현교 재가설공사	4,205	3,183	771	251	-	2021	2017	95
수의∼동막 간 도로개설	30,994	260	-	3,000	27,734	2027	2017	20
장성동일원 도로개설공사	6,099	137	200	-	5,762	2023	2017	10
봉명2송정동 주민센터 진입로확장	4,473	24	-	2,491	1,958	2023	2017	10
옥산면 오산리 도로개설공사	3,180	470	2,710	-	-	2021	2018	95
월명로 확장공사	2,126	92	-	1,000	1,034	2023	2018	20
월오∼가덕 간 도로개설	15,100	12,352	1,748	1,000	-	2021	2018	100
상리터널 앞 연결로 설치공사	4,700	-	-	200	4,500	2022	2018	5
원평교차로 개선공사	3,200	151	-	2,999	50	2022	2018	20
석화건널목 입체화사업	12,000	2,280	500	4,200	5,020	2024	2019	20
모충로 확장사업	2,800	-	2,400	400	-	2021	2019	20
정북동토성 진입로개설	2,765	-	170	500	2,095	2022	2019	5
농수산물 도매시장 진입도로 개설공사	11,100	-	-	200	10,900	2025	2020	5
신봉동 아주공업사~ 석교공업사 간 도로개설	4,418	1,055	800	700	1,863	2023	2017	30
석화천 생태하천 복원사업	15,000	5,027	6,205	1,926	1,842	2022	2017	75
무심천 자전거도로 산책로 이원화사업	2,000	91	629	634	646	2022	2019	30
정북동 생태역사공원 조성사업	4,000	-	265	-	3,735	2022	2019	10
오창 과학산업단지 완충저류시설 설치사업	39,537	6,396	7,948	4,875	20,318	2022	2017	40
청주 일반산업단지 완충저류시설 설치사업	28,819	714	5,620	4,497	17,988	2022	2018	30
현도 일반산업단지 완충저류시설 설치사업	6,629	714	1,182	945	3,788	2022	2018	30
오창제2 산업단지 완충저류시설 설치사업	11,727	-	714	1,101	9,912	2023	2019	15
옥산 산업단지 완충저류시설 설치사업	19,111	-	714	1,840	16,557	2023	2019	10
오송 생명과학단지 완충저류시설 설치사업	41,627	-	714	4,091	36,822	2023	2019	20
소규모사업장 방지시설설치 지원사업	3,140	-	3,140	-	-	2020	2019	100
청주시 재활용선별센터 신축사업	10,950	1,060	701	829	8,360	2022	2019	20
청주 하수처리장 증설사업(3단계)	78,570	21,233	-	-	57,337	2023	2014	설계 95
하수도 중점 관리지역 (내덕분구) 침수예방사업	49,536	4,260	11,936	9,431	23,909	2022	2018	공사 42
하수도 중점 관리지역 (석남천분구) 침수예방사업	43,988	4,380	11,002	9,639	18,967	2022	2018	공사 36
대청호 품곡하수처리장 하수관로 정비사업	10,061	-	366	73	9,622	2023	2019	설계 95
수곡지구 우수저류시설 설치사업 및 하수도 중점 관리지역 (수곡) 침수 예방사업	27,500	11,997	4,503	594	10,406	2024	2020	공사 34.6
가경지역 도서관및 문화센터건립	13,300	7,575	5,725	-	-	2020	2016	100
차 없는 거리 조성을위한 대체도로 개설(보상)	5,738	3,130	2,608	-	-	2020	2018	100
유네스코 국제기록 유산센터건립	16,400	1,535	3,156	5,000	6,709	2023	2019	28
복대근린공원 조성사업	7,700	5,230	-	20	2,450	2024	2018	70
명암유원지 생태공원 조성사업	8,600	564	-	1,820	6,216	2023	2019	25
운천근린공원 조성사업	47,700	40	10,690	5,630	31,340	2023	2019	25
삼선당공원 조성사업	11,700	20	170	-	11,510	2023	2019	20
강내근린공원 조성사업	5,600	20	2,480	1,100	2,000	2023	2019	45
명심근린공원 조성사업	47,400	30	510	10,000	36,860	2023	2019	45
구룡2구역 근린공원 조성사업	49,500	30	5,270	10,000	34,200	2023	2019	25
우암산삼일 역사공원 조성사업	6,900	-	450	-	6,450	2023	2019	45
사직2근린공원 조성사업	18,100	20	100	-	17,980	2023	2019	20
가드닝 페스티벌	1,142	299	343	-	500	2022	2019	50
장기미집행 완충녹지 조성사업	13,839	55	1,790	3,500	8,494	2023	2019	25
청주시립미술관기획전	496	-	496	-	-	-	2019	100
대청호 환경미술제	457	-	67	100	290	2022	2019	50

개별 투자심사 사업의 추진현황 [별지 11]

10-2. 지방채 발행사업

우리 청주시에서 ‘20년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
월오~가덕간 도로개설공사	15,100	2,000	0	0	13,100	0	2,000	100

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2020년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외 ※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

월오∼가덕 간 도로개설공사

담당자

도로시설과 정원진(☎201-2794)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주 남부권 개발에 따른 교통량 분산처리 및 교통소통 원활

○ 지역주민 숙원사업 해소와 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 01. ~ 2021. 09.

○ 위 치 : 청주시 상당구 월오동 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=1.61km B=10.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기 투 자	2020년	2021년	2022년 이후
계	15,100	12,352	1,748	1,000
지 방 채	2,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	13,100	10,352	1,748	1,000
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012. 05. : 공사착공

○ 2013. 10. : 공사정지(종단구배 완화를 위한 도로선형 조정)

○ 2015. 06. : 업무보고(경사도 완화, 14.8%→ 9.8%)

○ 2015. 08. : 추진계획보고(월오~가덕간, 황청도로 용역재추진, 경사도 추가 완화)

○ 2016. 06. : 주민설명회 개최(3회, 경사도 9.8%→7.9%)

○ 2017. 05. : 구배추가 조정 부동의 회신(금강유역환경청)

○ 2017. 08. : 주민설명회 개최

○ 2018. 01. : 도로 노선지정 고시

○ 2018. 02. : 도로구역 결정 관계기관 협의

○ 2018. 04. : 도로구역 및 지형도면 고시

○ 2018. 06. : 공사 재 착공

○ 2020. 06. : 보강토옹벽, 본선 절ㆍ성토, 종배수관 설치

○ 2021. 06. : 도로개통 및 준공 (도로개통 21.05.04.)

□ 사업변경 내역

구 분	당 초	현 재	비 고
총사업비	87억원	151억원	증 64억원
사업기간	20개월	50개월	증 30개월

10-3. 민간투자사업

우리 청주시에서 ‘20년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2020년	2021년	2022년 이후
BTL	‘05청주시 하수관거정비 BTL민간투자 사업	청주친환경주식회사	54,230	28,123	2,573	2,577	20,957	2010.2.13.~ 2030.2.12.
BTO	청주하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업	청주 하이워터(주)	62,160	0	6,542	9,916	45,702	운영일로부터 20년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2020년까지는 집행액(결산기준), 2021년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

청주시 하수관거정비 BTL 민간투자사업

담당자

하수정책과 박상훈(☎201-4774)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 지하수·방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리 효율 제고 등을 도모하고자 함.

□ 사업개요

○ 기   간 : 2005. ~ 2010.

○ 위   치 : 청주시 일원

○ 민간사업자 : 청주친환경(주)

○ 총사업비 : 54,230백만원(임대료+운영비)

○ 사업규모 : A=5.61㎢, L=33.766km

□ 재정부담 현황

○ 계약조건(2010~2030, 20년간)

○ 지금까지 재정부담액(임대료+운영비) 및 향후 부담예정액

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기 투 자	2020년	2021년	2022년 이후
계	54,230	28,123	2,573	2,577	20,957
국 비	18,065	9,481	851	843	6,890
시 도 비	12,559	6,592	649	625	4,693
시군구비	19,259	9,769	971	951	7,568
기 타	4,347	2,281	102	158	1,806

□ 추진단계(운영 중)

○ 2005. 6. 10. : 시설사업 기본계획 고시(청주시)

○ 2006. 6. 13. ~ 2010. 2. 12. : 공사 준공

○ 2010. 2. 13. ~ : 성능평가 확인 후 운영 중

□ 향후계획

○ 분기별 성과평가위원회 개최 결과에 의거 임대료 및 운영비 지급

사업명

청주 하수처리시설 하수처리수

재이용 민간투자사업(BTO)

담당자

하수정책과

안희성(☎201-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주 하수처리장의 하수처리수를 재이용 처리하여 청주산업단지 내에 공업 용수로 공급하여 용수부족 문제 해결

□ 사업개요

○ 기      간 : 2017. 8. ~ 2022. 12.

○ 위      치 : 청주시 흥덕구 옥산면 가락리 135-9번지 일원

○ 사업사업자 : 청주하이워터(주)

○ 사 업  규 모 : 시설용량 35,000㎥/일, 공급관로 8.1km

□ 재정부담 현황

○ 총사업비 : 62,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기 투 자	2020년	2021년	2022년 이후
계	62,160	0	6,542	9,916	45,702
국 비	24,864	0	6,542	3,912	14,410
시 도 비
시군구비	6,216			1,015	5,201
기 타	31,080			4,989	26,091

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 :  30 %)

○ 2018. 11. : 타당성조사완료

○ 2019. 09. : 제안서 평가 및 우선협상대상자 지정

○ 2020. 09. : 실시협약체결 및 사업시행자 지정

○ 2021. 01. : 실시계획승인

○ 2021. 02. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사준공(시운전포함)

○ 2023. 01. : 운영개시(수요처 용수공급)

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음