109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 청주시에서 ‘21년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2021 집행사업비	2022년	2023년 이후
서원청소년 문화의집 건립사업	6,549	2,212	85	2,696	1,556	2023	2019	실시설계완료
임시청사 이전 사무실 조성	5,360	0	96	5,264	0	2022	2021	10
청주시 마을 방송시스템 구매 설치	11,861	4,510	898	2,753	3,700	2023	2018	55
임시청사 정보통신시설 이전	3,200	0	581	2,619	0	2022	2021	70
청주시 통합 정보센터 임시청사 이전	2,100	0	501	1,599	0	2022	2021	100
육거리종합시장 대형버스 주차장 조성	6,700	3,328	728	2,644	0	2022	2019	20
서문시장 주차장 조성	2,577	1,877	700	0	0	2021	2020	100
율량지구 주차타워 조성사업	9,420	0	2,326	4,654	2,440	2023	2019	5
2020년 청주시 지능형교통 체계(ITS) 확대구축 사업	3,200	2,087	1,113	0	0	2021	2019	100
2021년 청주시 지능형교통 체계(ITS) 확대구축사업	3,000	0	2,156	844	0	2022	2020	100
제8회 한국 피플퍼스트대회	100	0	100	0	0	2021	2020	100
장애인 가족지원센터 재건축공사	1,682	58	748	876	0	2022	2020	88
청주시365열린 장애인 돌봄센터건립	2,802	540	1,138	1,124	0	2022	2020	85
청주시 가족센터 조성사업	12,000	2,055	1,928	8,017	0	2022	2018	47
청주 동부창고 문화재생사업	2,400	571	1,829	0	0	2021	2017	100
사주당 태교 랜드 조성사업	18,700	9,773	1,627	5,200	2,100	2024	2019	실시설계 30
문화예술교육 전용시설 조성	2,500	2,000	0	500	0	2022	2020	실시설계 85
2021청주공예 비엔날레	5,700	0	5,700	0	0	2021	2020	100
제28회 청주 민족예술제	87	0	87	0	0	2021	2020	100
충북상업정보고 다목적교실 증축	2,379	206	2,173	0	0	2021	2019	100
충북고 다목적교실 증축	3,935	21	2,073	1,841	0	2022	2019	95
원봉중 다목적교실 증축	3,863	0	7	1,302	2,554	2023	2021	설계중
초정클러스터 관광육성	24,950	4,248	3,480	9,062	8,160	2023	2021	36
청주 영운 국민체육센터 건립사업	19,980	9,677	7,678	2,625	0	2022	2018	95
내수 야구장 조성사업	9,100	80	0	9,020	0	20230	2018	30
청주 인공암벽장 건립사업	4,000	464	2,398	1,138	0	2022	2018	95
오송 다목적 체육관건립사업	20,100	7,380	245	2,374	10,101	2023	2018	실시설계 75
복대 국민체육센터건립사업	13,000	268	268	12,464	0	2023	2019	실시설계 75
가경 국민체육센터건립사업	12,700	288	248	12,164	0	2023	2019	실시설계 75
청주 배드민턴 체육관 건립사업	17,500	0	600	0	16,900	2024	2019	도시계획결정 40
사천반다비 체육센터 건립사업	2,500	0	130	2,370	0	2022	2019	70
산남 국민체육센터 건립사업	10,000	0	322	177	9,501	2023	2019	실시설계 60
오창 국민체육센터 건립사업	25,000	0	75	8,925	16,000	2023	2020	설계공모 50
청주시농수산물 도매시장시설 현대화사업	136,778	848	24,501	34,409	77,020	2025	2020	실시설계 72
2020년수소 충전소설치사업	3,000	0	3,000	0	0	2021	2019	100
도시가스 공급관설치 지원사업	2,750	0	2,750	0	0	2021	2020	100
2021년 수소 충전소설치사업	3,000	0	3,000	0	0	2022	2021	100
2021년도 신재생에너지 융복합지원사업	4,452	0	4,452	0	0	2021	2020	100
충북 청주 강소연구개발특구 육성사업	20,600	7,100	4,800	2,900	5,800	특구 해제시	2021	58
청주산업단지 재생사업	32,569	8,067	3,000	7,000	14,502	2024	2017	30
청주산업단지 행복주택 건립사업	84,028	20,567	9,328	17,856	36,277	2024	2017	10
남주남문로 웨딩테마거리 조성사업	6,060	2,709	1,571	1,780	0	2022	2016	70
도시재생한마당	1,000	0	1,000	0	0	2021	2020	100
공예공방거리 및 덕벌나눔 허브센터 조성사업	21,492	7,408	2,224	2,446	9,414	2023	2021	50
흥덕구청사 건립사업	61,774	43,064	18,680	0	0	2021	2016	100
청주시청사 건립사업	275,000	128,991	5,524	400	140,085	2025	2021	25
외평동복지거점센터건립	4,182	2,309	1,873	0	0	2021	2018	100
시립미술관 및 추모공원 접근성개선사업	3,887	0	1,178	2,709	0	2022	2021	5
금천동 행정복지센터 신축	6,735	0	41	3,006	3,688	2023	2021	15
소규모 사업장 방지시설 설치지원사업	3,871	2,060	1,811	0	0	2021	2019	100
농산물 안전성 분석실 구축	5,232	4,285	947	0	0	2021	2019	100
첨단농업 연구단지 조성	8,331	8,283	48	0	0	2021	2018	100
미평동 남지로 주변 도로개설(중로1-36)	8,000	5,736	2,000	264	0	2022	2014	84
아름다운웨딩홀~고은삼거리 도로확포장 (중로1-34)	25,000	5,000	3,001	1,000	15,999	2025	2014	18
제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사	46,120	2,867	8	0	43,245	2025	2015	실시설계 95
상당산성진입로 확장(중로2-26)	5,488	620	2,000	1,000	1,868	2023	2015	실시설계 완료
수영로확장공사 (중로1-3)	16,769	200	0	0	16,569	2025	2015	실시설계 완료
대성로(건설 회관~상당공원)확장	24,443	19,512	2,000	0	2,931	2023	2016	75
석곡사거리 ~척북삼거리 확장공사	48,300	3,484	1,080	800	42,936	2027	2016	공사 (1단계) 준공
서부로(석곡사거리~죽림사거리) 확장공사	18,000	311	4,339	8,000	5,350	2024	2016	실시설계 완료
무심서로(제2운천교~차량등록사업소)확장사업	8,467	225	0	2,000	6,242	2023	2016	실시설계 완료
용담로(청가랑~괴강매운탕) 확장공사	5,918	2,647	1,800	1,471	0	2022	2016	12
새터초교 앞 도로확장공사	4,300	566	0	1,000	2,734	2023	2016	실시설계 완료
신봉동 아주공업사~ 석교공업사간 도로개설	4,418	1,855	1,900	663	0	2023	2016	철거공사 40
단재로(효촌교차로~청남농협) 확장공사	7,100	3,427	741	2,932	0	2022	2017	52
가마교차로 확장공사	3,910	1,805	2,105	0	0	2021	2017	100
목련로 (월오묵집~산성로) 개설공사	42,000	0	0	0	42,000	2027	2017	0
대성로확장공사	11,830	0	0	300	11,530	2024	2017	실시설계 25
복현교 재가설공사	4,205	3,004	1,001	200	0	2022	2017	100
수의~동막간 도로개설	30,994	260	0	1,000	29,734	2027	2017	실시설계 완료
장성동 도시 계획도로 개설	6,099	137	0	0	5,962	2023	2017	실시설계 완료
17번국도 우회도로(양지리 ~복현리간) 개설	18,200	200	0	1,400	16,600	2026	2017	실시설계 72
상당산성 진입도로 확장	5,488	620	2,000	1,000	1,868	2023	2018	실시설계 완료
옥산면 오산리 도로개설공사	3,180	3,180	0	0	0	2021	2018	100
월명로확장공사	2,126	92	0	0	2,034	2023	2018	실시설계 완료
월오~가덕간 도로개설공사	15,100	14,100	1,000	0	0	2022	2018	100
상리터널 앞 연결로설치공사	4,700	0	122	1,000	3,578	2023	2018	실시설계 72
원평교차로 개선공사	3,200	151	622	500	1,927	2023	2018	7
봉명2송정동 주민센터 진입로 확장	4,473	24	0	0	4,449	2023	2018	실시설계 완료
남이면 석판 ~대련간 도로확장(1단계)	4,367	0	100	100	4,167	2023	2018	실시설계 20
석화건널목 입체화사업	12,000	450	3,180	4,819	3,551	2024	2019	실시설계 완료
미호천제방도로 교행차로 설치공사	15,000	9,390	3,300	0	2,310	2023	2019	18
모충로확장사업	2,800	774	1,268	758	0	2022	2019	60
이정골 진입로 개설공사	7,530	62	500	3,000	3,968	2023	2019	실시설계 85
정북동 토성 진입로 개설공사	2,765	170	1,500	1,095	0	2022	2019	실시설계 완료
중부선 청주 흥덕 하이패스IC 설치공사	33,200	14,639	9,970	8,591	0	2022	2020	시 50 도공 35
농수산물 도매시장 진입도로개설	11,100	0	1,353	1,000	8,747	2025	2020	실시설계 72
모충대교 오거리 확장	3,658	0	0	0	3,658	2023	2020	0
강서~휴암간 도로개설공사	24,400	0	400	100	23,900	2025	2020	실시설계 95
오송지하차도 개설공사	43,000	602	9,942	500	31,956	2023	2020	실시설계 완료
청주하이테크 밸리 일반산업단지 진입도로 개설공사(1단계)	18,300	0	230	70	18,000	2025	2020	실시설계 20
석화천 생태 하천 복원사업	15,000	11,520	2,715	765	0	2022	2017	100
무심천 자전거도로 산책로 이원화사업	2,000	1,123	503	374	0	2022	2019	42
정북동 생태 역사공원 조성사업	4,000	114	65	3,821	0	2022	2019	5
오창 과학산업단지 완충저류시설 설치사업	44,474	14,344	4,875	7,111	18,144	2023	2017	52
청주 일반산업단지 완충저류시설 설치사업	44,713	6,334	4,497	1,798	32,084	2025	2018	36
현도 일반산업단지 완충저류시설 설치사업	10,215	1,896	945	947	6,427	2024	2018	38
오창제2 산업단지 완충저류시설 설치사업	11,727	714	1,101	0	9,912	2024	2019	24
옥산 산업단지 완충저류시설 설치사업	19,111	714	1,840	0	16,557	2024	2019	20
오송 생명과학단지 완충저류시설 설치사업	41,627	714	4,091	0	36,822	2025	2019	32
청주시 제2매립장 조성사업	48,228	31,102	3,619	9,388	4,119	2023	2016	53
청주시 재활용선별센터신축 사업	10,950	1,761	210	0	8,979	2025년	2019년	20
청주하수처리장 증설사업(3단계)	75,383	10,775	0	27,511	37,097	2024	2014	5
하수도중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업	49,536	16,196	13,032	18,574	1,734	2023	2018	76
하수도중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업	43,988	15,382	13,250	13,817	1,539	2023	2018	73
대청호 품곡 하수처리장 하수관로정비사업	7,379	584	1,013	1,269	4,513	2024	2019	공사 계약
청주 공공하수 처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업	62,160	41	22,595	39,524	0	2022	2019	78
수곡지구 우수저류시설 설치사업 및 하수도 중점관리지역 (수곡)침수 예방사업	27,500	16,500	900	1,275	8,825	2024	2020	75
하수도정비 중점관리지역 (가경분구) 침수예방사업	30,306	0	0	1,620	28,686	2025	2021	설계 집행
청주시립도서관 생활SOC 복합화사업	8,870	0	104	4,771	3,995	2023	2020	‘22. 7월 착공예정
유네스코 국제기록유산센터 건립	21,300	5,500	5,000	5,000	5,800	2023	2019	실시설계완료
2022 청주시 직지의 날 행사	1,800	0	300	1,500	0	2022	2021	100
복대근린공원 조성사업	7,730	5,230	0	100	2,400	2023	2018	59.9
내수중앙근린 공원 조성사업	6,520	1,116	3,114	90	2,200	2023	2021	59.4
사천근린공원 조성사업	11,530	8,300	30	120	3,080	2023	2021	60.0
명심근린공원 조성사업	47,400	540	10,884	7,000	28,976	2025	2019	36.8
구룡근린공원 조성사업	49,500	8,330	17,420	12,700	11,050	2026	2020	39.5
명암유원지 생태공원 조성사업	8,600	565	33	1,100	6,902	2024	2019	18.3
사직2근린공원 조성사업	18,100	0	0	16,500	1,600	2026	2019	10
삼선당공원 조성사업	11,700	97	0	0	11,603	2024	2019	10
우암산삼일 역사공원 조성사업	6,900	453	0	0	6,447	2026	2019	17.4
운천근린공원 조성사업	47,700	10,730	2,970	21,000	13,000	2025	2019	47.1
강내근린공원 조성사업	5,600	2,501	890	55	2,154	2025	2019	60
우암산근린공원 조성사업	33,900	10,420	9,760	13,720	0	2022	2021	56.2
중앙역사공원 조성사업	91,100	12,940	1,000	30,000	47,160	2026	2020	9
가드닝 페스티벌	642	642	0	0	0	2021	2019	100
장기미집행 완충녹지 조성사업	13,500	1,840	3,500	4,000	4,160	2024	2019	42.6
옥화자연휴양림 치유의 숲 조성사업	5,022	0	222	160	4,640	2024	2020	8
빛과학예술 융복합 프로젝트	390	0	390	0	0	2021	2020	100
충북재난안전 체험관주변 도시계획도로개설	3,200	0	61	2,331	808	2023	2021	15
강내 탑연리 도시계획도로 개설공사	2,260	1,350	840	70	0	2022	2018	60
내덕동 율량천변 제방도로개설	4,339	424	0	500	3,415	2023	2017	30
사천동 발산천변 도로개설	9,947	206	0	0	9,741	2023	2017	30
사천동 새터마을 도로개설공사 (재심사)	2,969	1,307	698	964	0	2022	2019	80

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2021년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘21년말 기준으로 작성

10-2. 지방채 발행사업

우리 청주시에서 ‘21년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
월오~가덕간 도로개설공사	15,100	2,000	0	0	13,100	0	2,000	100
충북청주 전시관건립 사업	208,800	7,000	29,000	65,000	58,000	49,800	7,000	착공
송정소하천 정비공사	8,080	2,000	630	0	5,450	0	2,000	75
명심근린공원 조성사업	47,400	38,976	0	0	8,424	0	10,000	53
구룡근린공원 조성사업	49,500	21,050	0	0	28,450	0	10,000	59

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2021년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

월오~가덕간 도로개설공사

담당자

도로시설과 한수연(☎201-2794)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주 남부권 개발에 따른 교통량 분산처리 및 교통소통 원활

○ 지역주민 숙원사업 해소와 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2010. 01. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 상당구 월오동 ~ 남일면 황청리(대로3-21호선)

○ 규 모 : 도로개설 L=1.61km, B=10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	15,100	14,100	1,000
지 방 채	2,000	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	13,100	12,100	1,000
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2012.  5. : 공사 착공

○ 2013. 10. : 공사 정지

○ 2018.  4. : 도로경사 9.8% 확정

○ 2018.  6. : 공사 재착공

○ 2021.  5. : 도로 전면 개통(5. 4.)

○ 2021.  6. : 공사 준공(6. 30.)

□ 향후계획

○ 미보상 필지 보상 진행

○ 인·허가 완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

충북청주전시관 건립사업

담당자

신성장산업과 신승권(☎201-1414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 바이오의약 및 화장품산업이 집중된 오송산단의 우수한 생산 인프라와 연계하여 지역특화산업 집중 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2015. ~ 2024.

○ 위 치 : 청주시 흥덕구 오송읍 일원(궁평·만수·봉산리)

○ 규 모 : 부지조성 205,711㎡ / 건축연면적 39,725㎡(지하1층, 지상2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 208,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	208,800	75,600	21,500	35,500	76,200
지 방 채	7,000		7,000
국 비	29,000	8,000	7,500	7,500	6,000
시 도 비	65,000	33,800	7,000	14,000	10,200
시군구비	58,000	33,800		14,000	10,200
기 타	49,800				49,800

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 착공)

○ 2020. 1. : 부지조성공사 착공

○ 2021. 9. : 건축공사 착공

□ 향후계획

○ 2022. 6.

- 부지조성 : 우·오수관로 공사 등

- 전시관 건축 : 토목공사(터파기 및 성토) 및 파일공사

○ 2022.  8. : 전시관 골조공사 착공

○ 2024. 11. : 건축공사 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

송정소하천 정비사업

담당자

하천방재과 손성호(☎201-2942)

□ 사업목적 및 필요성

○ 집중호우에 따른 하천 유실 및 농경지 침수 피해를 사전에 예방하고

지역주민과 함께하는 자연친화적인 소하천 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 2. ~ 2022. 6.

○ 위 치 : 청원구 북이면 송정리 73-4 ~ 옥수리 9-6 일원

○ 규 모 : 하천정비 L=2.52km, 구조물 7개소

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	8,080	3,264	3,000	1,816
지 방 채	2,000		2,000
국 비	630	630
시 도 비
시군구비	5,450	2,634	1,000	1,816
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 2017.  2. ~ 2017. 12. : 실시설계용역 착수 및 완료

○ 2019. 11. : 전체분 공사 착공

○ 2019. 11. ~ 2020.  6. : 1차분 공사 착공 및 준공

○ 2020.  2. ~ 2020. 12. : 2차분 공사 착공 및 준공

○ 2021.  2. ~ 2021. 12. : 3차분 공사 착공 및 준공

□ 향후계획

○ 2022.  2. : 4차분 공사 착공

○ 2022.  6. : 4차분 공사 준공, 전체분 준공

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 변경

- 당초 : 7,842백만원

(공사비 4,097, 관급자재 2,486, 보상비 831, 폐기물처리비 302, 기타 126)

- 변경 : 8,080백만원

(공사비 4,097, 관급자재 2,724, 보상비 831, 폐기물처리비 302, 기타 126)

사업명

구룡근린공원 조성사업

담당자

공원조성과 김도훈(☎ 201-2753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원 일몰제 해제로 사유재산권 침해 등 민원을 해소하고       도심 지역의 녹지를 확충하여 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 서원구 산남동 139-8번지 일원

○ 규 모 : 299,814㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 49,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	49,500	25,750	12,700	10,170	880
지 방 채	21,050	10,000		10,170	880
국 비
시 도 비
시군구비	28,450	15,750	12,700
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황 (진척률 : 59%)

○ 2021. 1. ~ 2022. 2. : 1 ~ 3차 협의보상

□ 향후계획

○ 2022. 3. ~ 6. : 미보상필지 재감정평가

○ 2022. 7. ~ 2024. 12. : 토지보상 및 수용 등

○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

명심근린공원 조성사업

담당자

공원조성과 김도훈(☎ 201-2753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시공원 일몰제 해제로 사유재산권 침해 등 민원을 해소하고       도심 지역의 녹지를 확충하여 쾌적한 환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 흥덕구 신봉동 산6번지 일원

○ 규 모 : 390,108.2㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	47,400	11,424	7,000	20,400	8,576
지 방 채	38,976	10,000		20,400	8,576
국 비
시 도 비
시군구비	8,424	1,424	7,000
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황 (진척률 : 53%)

○ 2021. 8. ~ 2021. 12. : 1 ~ 2차 협의보상

○ 2022. 1. ~ 2022.  6. : 3차 협의보상

□ 향후계획

○ 2022. 8. ~ 2022. 12. : 미보상필지 재감정평가

○ 2023. 1. ~ 2024. 12. : 토지보상 및 수용 등

○ 2025. 1. ~ 2025. 12. : 착공 및 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

10-3. 민간투자사업

우리 청주시에서 ‘21년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2021년	2022년	2023년 이후
BTL	05‘ 청주시 하수관거정비 BTL민간투자 사업	청주친환경주식회사	54,230	30,696	2,570	2,580	18,384
BTO	청주공공하수 처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업	청주 하이워터(주)	62,160	41	9,840	21,199	-	운영기간 20년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2021년까지는 집행액(결산기준), 2022년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비,민간투자금액 미포함

개별 민간투자사업 현황

사업명

05‘청주시 하수관거정비 BTL 민간투자사업

담당자

하수정책과 박상훈(☎201-4774)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간자본과 기술을 도입하여 하수관로의 경제적이고 효율적인 정비 및 운영관리를 통해 수질개선 및 하수처리장 처리 효율 제고

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 2. ~ 2030. 2.

○ 위    치 : 탑동,영운동,사직동,봉명동,가경동, 복대동 일원

○ 민간사업자 : 청주친환경 주식회사

○ 사업규모 : 하수관로 L=33.77km, 배수설비 75개소

□ 재정부담 현황

○ 총사업비 : 54,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	54,230	30,696	2,570	2,580	18,384
국 비	18,326	10,332	848	848	6,298
시 도 비	12,741	7,184	590	590	4,377
시군구비	18,753	10,695	928	938	6,192
기 타	4,410	2,485	204	204	1,517

□ 추진단계

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 2030. 2월까지 매년 분기별 시설임대료 및 운영비 지급

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음

사업명

청주 하수처리시설 하수처리수

재이용 민간투자사업(BTO)

담당자

하수정책과 안희성(☎201-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주 하수처리장의 하수처리수를 재이용 처리하여 청주산업단지 내에 공업 용수로 공급하여 용수부족 문제 해결

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 8. ~ 2022. 12.

○ 위    치 : 청주시 흥덕구 옥산면 가락리 135-9번지 일원

○ 사업사업자 : 청주하이워터(주)

○ 사업규모 : 시설용량 35,000㎥/일, 공급관로 8.1km

□ 재정부담 현황

○ 총사업비 : 62,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	62,160	41	22,595	39,524
국 비	24,864	41	9,840	14,983
시 도 비
시군구비	6,216			6,216
기 타	31,080		12,755	18,325

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 :  70 %)

○ 2018. 11. : 타당성조사완료

○ 2019. 09. : 제안서 평가 및 우선협상대상자 지정

○ 2020. 09. : 실시협약체결 및 사업시행자 지정

○ 2021. 01. : 실시계획승인

○ 2021. 02. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 12. : 공사준공 (시운전포함)

○ 2023.  1. : 운영개시 (수요처 용수공급)

□ 사업변경 내역

○ 해당 없음