109

주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 청주시에서 ‘22년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	집행액		향후 소요액		사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지진척률 (%)
		기투자	2022년 집행사업비	2023년	2024년 이후
서원청소년 문화의집 건립사업	6,549	2,297	174	4,078	0	2023	2019	실시설계 30
임시청사 이전 사무실 조성	5,364	96	5,268	0	0	2022	2021	100
청주시의회 임시청사 리모델링	4,430	0	96	4,334	0	2023	2021	90
청주시 마을 방송시스템 구매 설치지원	11,891	5,408	2,753	3,730	0	2023	2018	77
임시청사 정보통신시설 이전	3,200	581	1,980	639	0	2023	2021	80
청주시 통합 정보센터 임시청사 이전	2,100	501	1,599	0	0	2022	2021	100
육거리종합시장 대형버스주차장 조성사업	7,200	4,044	1,315	1,841	0	2023	2019	75
율량지구 주차타워 조성사업	9,420	2,326	2,434	4,600	0	2023	2019	70
2021년 청주시 지능형교통 체계(ITS) 확대구축사업	2,915	0	2,915	0	0	2022	2020	100
전기 시내버스 도입	4,783	0	4,783	0	0	2022	2021	100
충혼탑 추모공원 조성사업	7,000	0	900	4	6,096	2024	2021	20
시립미술관 및 추모공원 접근성 개선사업	3,887	1,223	1,473	1,191	0	2023	2021	80
청주시 가족센터 조성사업	12,000	3,983	8,017	0	0	2022	2018	100
사주당 태교 랜드 조성사업	18,700	1,757	706	4,000	12,237	2025	2019	실시설계 100
청주 문화도시 조성사업	18,600	5,771	3,000	3,000	6,829	2024	2019	75
문화예술교육 전용시설 조성	2,389	424	1,965	0	0	2022	2020	100
2022 청주전통공예페스티벌	200	0	200	0	0	2022 격년개최	2021	100
청남대 재즈토닉 페스티벌	454	0	454	0	0	연례반복	2021	100
동아시아문화 도시 교류사업	146	0	146	0	0	연례반복	2022	100
무형문화재 전수교육관 건립	7,408	0	65	2,655	4,688	2025	2021	보상완료
충북고 다목적교실 신축	3,808	1,356	2,452	0	0	2022	2019	100
원봉중 다목적교실 신축	4,608	7	153	2,246	2,202	2024	2020	10
2022 제21회 아시아스쿼시 선수권대회	212	0	212	0	0	2022	2021	100
제13회 청풍기 전국유도대회	240	0	240	0	0	2022	2021	100
청주시 스마트관광도시조성사업	7,000	0	3,630	3,370	0	2023	2022	51
초정클러스터 관광육성	24,950	7,728	5,386	11,836	0	2023	2021	60
청주 영운 국민체육센터 건립사업	19,980	17,355	2,625	0		2022	2018	100
내수 야구장 조성사업	9,100	80	2,329	6,691	0	2023	2018	50
청주 인공암벽장 건립사업	3,000	2,861	95	44	0	2023	2018	90
오송 다목적 체육관 건립사업	20,100	7,624	3,026	9,450	0	2023	2018	25
복대 국민체육센터 건립사업	13,000	538	2,511	9,951	0	2023	2019	30
가경 국민체육센터 건립사업	12,700	536	2,570	9,594	0	2023	2019	30
청주 배드민턴 체육관 건립사업	19,100	64	266	10,495	8,275	2024	2019	실시설계 30
사천반다비 체육센터 건립사업	2,500	130	2,331	39	0	2023	2019	100
산남 국민체육센터 건립사업	10,000	322	0	230	9,448	2024	2019	실시설계 70
오창 국민체육센터 건립사업	25,000	75	1,195	7,730	16,000	2025	2020	실시설계 100
청주예술의전당 소공연장 리모델링 사업	3,912	0	19	201	3,692	2024	2022	공공건축 기획용역
청주시 반려동물 보호센터 이전 건립	7,472	0	82	2,164	5,226	2024	2021	기본 및 실시설계 90
청주시농수산물 도매시장시설 현대화사업	136,778	25,350	19,973	20,195	71,260	2025	2020	40
2021년 수소 충전소 설치사업	3,000	3,000	0	0	0	2022	2021	100
2022년 수소 충전소 설치사업	5,358	0	5,358	0	0	2023	2021	100
2022년도 신재생에너지 융복합지원사업	4,392	0	4,392	0	0	2022	2021	100
충북 청주 강소연구개발특구 육성사업	20,560	11,860	2,900	2,900	2,900	2024	2021	80
청주산업단지 행복주택 건립사업	84,028	29,895	17,856	19,787	16,490	2024	2017	50
청주산업단지 재생사업	352,569	8,067	3,000	11,000	330,502	2024	2017	47
남주남문로 웨딩테마거리 조성사업	6,000	4,595	532	873	0	2023	2016	80
공예공방거리 및 덕벌나눔 허브센터 조성사업	4,400	8	200	4,192	0	2023	2021	10
방서동 새뜰 마을사업	4,290	0	220	495	3,575	2026	2022	10
청주시청사 건립사업	275,000	62,314	5,119	8,401	199,166	2028	2021	타당성 재조사 20
금천동 행정 복지센터 신축	8,600	15	240	8,325	20	2024	2021	실시설계 95
오창 성산리 도로확포장공사	4,210	3,550	660	0	0	2022	2017	100
북이 서당리 도로확포장공사	4,270	3,910	360	0	0	2022	2018	100
호정~추정간 도로확포장공사	7,117	5,148	1,969	0	0	2022	2018	100
구룡~화산간 도로확포장공사	4,400	356	947	1,200	1,897	2024	2019	3
남일 송암리 도로확포장공사	5,164	3,342	729	1,093	0	2023	2019	75
우암산 둘레길 조성사업	10,000	1,142	2,167	6,691	0	2023	2020	15
고은사거리~ 인차교 자전거전용도로 조성사업	2,650	1,800	850	0	0	2023	2019	78
낭성 삼산리 도로확포장공사	3,650	517	683	1,025	1,425	2024	2021	1
남일 송암리 (2공구) 도로확포장공사	3,100	900	2,200	0	0	2023	2021	95
문의 도원리 (2공구) 도로확포장공사	2,421	0	625	0	1,796	2025	2021	실시설계 90
현도 중척리 도로확포장공사	2,601	0	1,425	0	1,176	2025	2021	실시설계 95
내수 구성리 도로확포장공사	3,614	0	2,368	0	1,246	2025	2021	실시설계 95
오송 쌍청1리 도로확포장공사	7,800	3,830	2,470	550	950	2024	2017	15
죽전~품곡간 도로확포장공사	12,600	1,089	4,535	2,850	4,126	2025	2017	3
북이 장양리 도로확포장공사	3,700	528	1,952	460	760	2024	2022	5
미원 중리 도로확포장공사	2,400	80	705	615	1,000	2024	2022	10
미평동 남지로 주변 도로개설(중로1-36)	8,500	6,537	1,307	656	0	2023	2014	착공
아름다운웨딩홀~고은삼거리 도로확포장 (중로1-34)	25,000	8,001	1,000	500	15,499	2025	2014	52
제2순환로(송절교차로~율량교차로)확장공사	46,120	2,875	0	0	43,245	2027	2015	실시설계 95
상당산성 진입로 확장(중로2-26)	5,488	954	1,269	3,265	0	2024	2015	20
수영로확장공사 (중로1-3)	16,769	200	5,000	5,000	6,569	2025	2015	실시설계 100
대성로(건설 회관~상당공원)확장	24,443	21,512	300	2,631	0	2023	2016	90
중부선 청주흥덕 하이패스IC 설치공사	48,600	24,635	13,355	10,610	0	2023	2020	시 95 도공 65
석곡사거리 ~척북삼거리 확장공사	48,300	4,564	800	0	42,936	2027	2016	실시설계 10
서부로(석곡사거리 ~죽림사거리) 확장공사	18,000	4,655	5,082	1,400	6,863	2024	2016	10
무심서로(제2 운천교~차량등록사업소)확장사업	8,467	225	0	1,500	6,742	2024	2016	실시설계 100
용담로(청가랑~괴강매운탕) 확장공사	5,918	1,193	2,544	1,181	1,000	2024	2016	12
미호천제방도로 교행차로 설치공사	15,000	8,678	1,817	4,505	0	2023	2019	86
새터초교 앞 도로확장공사	4,300	566	1,000	2,734	0	2024	2016	실시설계 100
강내 도시계획도로 개설 (2단계 심사)	16,700	4,973	0	8,700	3,027	2025	2017	실시설계 100
신봉동 아주공업사~ 석교공업사간 도로개설	4,655	3,755	700	200	0	2024	2016	20
단재로(효촌교차로~청남농협) 확장공사	7,100	4,168	855	2,077	0	2023	2017	85
남일면 신송리 도로확장	14,645	0	600	7,854	6,191	2025	2022	실시설계 30
수의~동막간 도로개설	30,994	260	0	1,000	29,734	2027	2017	1단계 실시설계 100
장성동 도시 계획도로 개설	6,099	337	0	5,762	0	2025	2017	실시설계 100
봉명2송정동 주민센터 진입로 확장	4,473	24	0	4,449	0	2023	2018	실시설계 100
오송읍 양지리 ~원리간) 개설	18,200	200	4,400	3,900	9,700	2026	2017	실시설계 90
월명로확장공사	2,126	92	0	2,034	0	2024	2018	실시설계 100
오송지하차도 개설공사	43,000	9,992	5,865	500	26,643	2027	2020	실시설계 100
상리터널 앞 연결로 설치공사	5,450	122	377	1,500	3,451	2025	2018	실시설계 95
원평교차로 개선공사	3,900	3,200	0	700	0	2023	2018	60
남이면 석판 ~대련간 도로확장(1단계)	23,542	0	64	70	23,408	2025	2018	실시설계 65
석화건널목 입체화사업	15,300	3,630	4,269	5,307	2,094	2024	2019	18
이정골 진입로 개설공사	7,530	37	89	3,404	4,000	2024	2019	실시설계 85
정북동 토성 진입로 개설공사	2,765	1,580	1,095	90	0	2024	2019	실시설계 100
오송가락로 (만수~쌍청) 확장공사	17,700	0	500	1,000	16,200	2024	2020	실시설계 60
농수산물 도매시장 진입도로 개설	11,100	193	37	2,123	8,747	2025	2020	실시설계 45
강서~휴암간 도로개설공사	24,400	500	0	1,000	22,900	2025	2020	실시설계 90
청주하이테크 밸리 일반산업단지 진입도로 개설공사	18,300	230	70	200	17,800	2025	2020	실시설계 30
김수녕 양궁장 진입도로 확장공사	3,500	0	0	3,500	0	2025	2021	실시설계 80
직지대로(서청주IC~청주역)확장	47,000	200	700	5,000	41,100	2026	2022	타당성평가 용역착수
대성로 확장공사(2단계)	11,830	0	0	5,000	6,830	2025	2022	실시설계 70
대성로60번길 확장공사	4,662	0	0	2,000	2,662	2024	2022	실시설계 70
석화천 생태 하천 복원사업	15,000	14,235	765	0	0	2022	2017	100
무심천 자전거도로 산책로 이원화사업	3,000	2,000	500	500	0	2023	2019	70
정북동 생태 역사공원 조성사업	4,000	265	3,735	0	0	2023	2021	65
오창 과학산업단지 완충저류시설 설치사업	44,474	19,219	12,826	12,429	0	2024	2017	70
청주 일반산업단지 완충저류시설 설치사업	44,713	10,831	1,798	1,715	30,369	2025	2022	60
현도 일반산업단지 완충저류시설 설치사업	10,215	2,841	947	2,967	3,460	2024	2018	65
오창제2 산업단지 완충저류시설 설치사업	11,727	1,815	0	495	9,417	2024	2019	실시설계 30
옥산 산업단지 완충저류시설 설치사업	19,111	2,554	0	828	15,729	2024	2019	실시설계 30
오송 생명과학단지 완충저류시설 설치사업	41,627	4,805	0	1,472	35,350	2025	2019	실시설계 30
청주시 다회용기 공공세첵선터 건립	5,900	0	264	2,000	3,636	2024	2022	실시설계 95
청주시 재활용선별센터 신축사업	10,950	1,971	0	716	8,263	2025	2019	20
청주시 제2매립장 조성사업	48,228	34,663	9,388	4,177	0	2023	2016	90
청주시 노후 재활용 선별센터 신축사업	15,840	19	0	0	15,821	2026	2022	1
청주하수처리장 증설사업(3단계)	75,383	10,775	27,511	13,817	23,280	2024	2014	7
청주 공공하수 처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업	62,160	22,636	34,080	5,444	0	2023	2019	90
하수도중점관리지역(내덕분구) 침수예방사업	49,536	29,228	18,574	1,734	0	2023	2018	98
하수도중점관리지역(석남천분구) 침수예방사업	43,988	28,632	13,817	1,539	0	2023	2018	98
대청호 품곡 하수처리장 하수관로 정비사업	7,379	1,597	637	1,334	3,811	2024	2019	30
수곡지구 우수저류시설 설치사업 및 중점관리지역(수곡)침수예방사업	31,904	900	53	2,832	28,119	2025	2020	침수예방실시설계 90
하수도정비 중점관리지역 (가경분구) 침수예방사업	30,306	0	740	879	28,687	2025	2021	실시설계 50
청주독서대전	200	0	13	187	0	2023	2021	100
청주시립도서관 생활SOC 복합화사업	8,870	1,750	3,125	3,995	0	2023	2020	40
유네스코 국제기록유산센터 건립	21,300	7,156	4,206	9,938	0	2023	2019	45
2022 청주시 직지의 날 행사	1,585	0	1,585	0	0	2022	2021	100
청주고인쇄박물관 상설전시실 개편	3,300	0	1,034	2,266	0	2023	2018	실시설계 100
복대근린공원 조성사업	9,330	5,230	100	4,000	0	2023	2014	보상완료
내수중앙근린 공원 조성사업	6,520	3,930	90	2,500	0	2023	2017	보상완료
사천근린공원 조성사업	11,530	8,210	120	3,200	0	2023	2017	보상완료
가드닝 페스티벌	500	100	0	100	300	2023	2019	100
구룡근린공원 조성사업	49,500	8,330	17,420	12,700	11,050	2026	2019	토지보상 89
명심근린공원 조성사업	66,786	27,200	0	12,296	27,290	2026	2019	토지보상 96
명암유원지 생태공원 조성사업	9,700	590	1,100	1,200	6,810	2024	2019	토지보상 96
사직2근린공원 조성사업	18,100	0	0	15,100	3,000	2026	2019	토지보상 95
우암산삼일 역사공원 조성사업	6,900	453	0	0	6,447	2026	2019	토지보상 99
운천근린공원 조성사업	56,050	29,550	21,000	2,500	3,000	2024	2019	토지보상 97
강내근린공원 조성사업	5,600	2,501	890	55	2,154	2024	2019	보상완료
우암산근린공원 조성사업	33,000	26,200	6,300	500	0	2023	2019	90
장기미집행 완충녹지 조성사업	22,780	9,560	0	4,000	9,220	2025	2019	토지보상 71
중앙역사공원 조성사업	91,100	13,940	1,000	0	77,160	2026	2020	실시설계 100
수동근린공원 조성사업	12,000	0	105	8,000	3,895	2028	2022	토지보상 76
옥화자연휴양림 치유의 숲 조성사업	5,124	222	262	2,320	2,320	2025	2020	실시설계 30
김복진 미술상 제정 기념 특별전	187	0	130	57	0	2023	2021	전시운영 70
충북재난안전 체험관 주변 도시계획도로개설	3,200	100	2,292	808	0	2024	2021	도시관리계획 변경 중
강내 탑연리 도시계획도로 개설공사	2,250	2,110	140	0	0	2022	2018	100
내덕동 율량천변 제방도로개설	3,270	724	478	700	1,846	2024	2017	도시계획시설 실시계획인가 30
사천동 발산천변 주변 도로개설	9,900	214	0	0	9,686	2023	2017	도시계획시설 실시계획인가 30
사천동 새터마을 도로개설	3,203	2,988	0	215	0	2023	2017	100

‣ 대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여
2022년에 추진한 사업

※ 총사업비는 투자심사 이후 변경이 있는 경우 ‘22년말 기준으로 작성

10-2. 지방채 발행사업

우리 청주시에서 ‘22년에 추진한 지방채 발행사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총 사업비	재원구성					지방채 승인액	진척률
		지방채	국비	시도비	시군구비	기타
다목적 방사광가속기 구축사업	1,045,400	12,000	845,400	100,000	88,000	0	12,000	부지 조성(62%) 및 기반시설 설계용역 추진 중

▸ 대상사업 : 지방채 발행사업 중 2022년에 추진한 사업

※ 시도비 및 시군구비는 지방채 제외

※ 총사업비 = 지방채+국비+시도비+시군구비+기타

10-2-1. 개별 지방채 발행사업 추진현황

개별 지방채 발행사업 추진현황

사업명

다목적 방사광가속기 구축사업

담당자

신성장산업과 박종민(☎201-1473)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주시 100년 미래를 여는 성공적인 다목적 방사광가속기 및 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 12. ~ 2027. 12.

○ 위    치 : 오창읍 후기리 산16-1 일원(오창테크노폴리스산업단지 내)

○ 규    모 : 54만㎡(기본부지 31만㎡, 초과부지 23만㎡)

○ 장비사양 : 저장링 800m, 빔에너지 4GeV, 초기빔라인 10기(총 40기)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,045,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,045,400	27,500	65,000	121,200	831,700
지 방 채	12,000		12,000
국 비	845,400	11,500	41,000	60,000	732,900
시 도 비	100,000	8,000	12,000	30,600	49,400
시군구비	88,000	8,000		30,600	49,400
기 타

※ 집행액 : 지방채발행액 포함, 향후 소요액 : 지방채발행예정액 포함

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 부지조성(62%) 및 기반시설 설계용역 추진 중)

○ 2020. 5.  8. : 방사광가속기 구축 선정

○ 2020. 5. 21. : 과기정통부-충북도-청주시 업무협약

○ 2021. 4. 30. : 예비타당성조사 최종 통과

○ 2022. 4. 22. : 부지 분양계약 체결

○ 2022. 9. 19. : 방사광가속기 기반시설 설계용역 추진

□ 향후계획

○ 2023. 12.    : 방사광가속기 부지 공사 준공

○ 2024.       : 방사광가속기 구축사업 착공예정

10-3. 민간투자사업

우리 청주시에서 ‘22년에 추진한 민간투자사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업 유형	사업명	민간 사업자	총사업비	재정부담액		부담 예정액		계약 기간
				기투자	2022년	2023년	2024년 이후
BTL	‘05 청주시 하수관거정비 BTL민간투자 사업	청주친환경주식회사	54,230	33,266	2,584	2,584	15,796	2010. 2.13. ~ 2030. 2.12.
BTO	청주공공하수 처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업	청주 하이워터(주)	62,160	9,881	17,661	3,538	-	운영기간 20년

▸ 재정부담액

- 임대료(BTL), 최소수익보장 운영비(BTO) 등의 2022년까지는 집행액(결산기준), 2023년 이후는 추정액

※ 총사업비 : 민간투자사업심의시 총사업비

※ 재정부담액 범위 : 국비+시도비+시군구비, 민간투자금액 미포함

10-3-1. 개별 민간투자사업 현황

개별 민간투자사업 현황

사업명

‘05 청주시 하수관거정비 BTL 민간투자사업

담당자

하수정책과 권재형(☎201-4774)

□ 사업목적 및 필요성

○ 민간의 자본과 기술을 도입하여 하수관거시설에 대한 경제적이고 효율적인  정비 및 운영관리를 통해 지하수ㆍ방류수역의 오염방지와 하수처리장 처리  효율 제고 등을 도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2010. 2. ~ 2030. 2.

○ 위    치 : 탑동,영운동,사직동,봉명동,가경동,복대동 일원

○ 민간사업자 : 청주친환경 주식회사

○ 사업규모 : 하수관로 L=33.77km, 배수설비 75개소

□ 재정부담 현황

○ 총사업비 : 54,230백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	54,230	33,266	2,584	2,584	15,796
국 비	18,326	11,180	848	848	5,450
시 도 비	12,741	7,774	630	630	3,707
시군구비	18,753	11,623	963	963	5,204
기 금*	4,410	2,689	143	143	1,435

* 금강수계관리기금

□ 추진상황

○ 운영 중

□ 향후계획

○ 2030. 2월까지 매년 분기별 시설임대료 및 운영비 지급

사업명

청주 공공하수처리시설 하수처리수

재이용 민간투자사업(BTO)

담당자

하수정책과 한민재(☎201-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청주 하수처리장의 하수처리수를 재이용 처리하여 청주산업단지 내에 공업 용수로 공급하여 용수부족 문제 해결

□ 사업개요

○ 기    간 : 2017. 8. ~ 2023. 06.

○ 위    치 : 청주시 흥덕구 옥산면 가락리 135-9번지 일원

○ 사업사업자 : 청주하이워터(주)

○ 사업규모 : 시설용량 35,000㎥/일, 공급관로 8.3km

□ 재정부담 현황

○ 총사업비 : 62,160백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	재정부담액		부담예정액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	62,160	22,636	34,080	5,444
국 비	24,864	9,881	14,983
시 도 비
시군구비	6,216		2,678	3,538
기 타	31,080	12,755	16,419	1,906

□ 추진상황

○ 2018. 11. : 타당성조사완료

○ 2019.  9. : 제안서 평가 및 우선협상대상자 지정

○ 2020.  9. : 실시협약체결 및 사업시행자 지정

○ 2021.  1. : 실시계획승인

○ 2021.  2. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2023.  6. : 공사준공 (시운전포함)

○ 2023.  8. : 운영개시 예정(수요처 용수공급)